D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

                                                                                        NR. 114

                                                                                       DEL 15-12-2014

       Impegno
        Prenotazione d’impegno
        Impegno e liquidazione
        Liquidazione
        Altro

OGGETTO: Lavori complementari alle strutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Trasmessa a:  	Attestazione e
data di ricevimento	
       Sindaco		
       Assessore		
       Servizio AA.GG.LL.AA. – Demografia e Cimiteri		
       Servizio Gestione Finanziaria e Tributi		
       Servizio LL.PP. e Tecnico/Manutentivo		
       Servizio Controlli Ambientali		
       Servizi Interventi alle Persone e Biblioteca/Sociale e Cultura		
       Servizio Pianificazione Territoriale		
       Ufficio Polizia Municipale		
       Capigruppo		

Il Responsabile di Servizio
(Arch. ALDO GHERARDI)

Il  Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale

Premesso che i lavori di “Realizzazione di infrastrutture elettriche con punti di ricarica nelle aree urbane” sono giunti quasi alla fine ed il Direttore dei Lavori incaricato Ing. Giacomo Avagliano ha riscontrato la necessità non prevedibile in fase progettuale di completare alcuni interventi stimati in economia nel progetto principale in quantità minore rispetto all’effettiva necessità riscontrata in corso d’opera;

Vista la perizia estimativa delle piccole opere mancanti trasmessa in data 04/12/2014 prot. com. n. 19470 dal D.L. incaricato Ing G. Avagliano per rendere l’opera compiuta;

Visto il computo metrico estimativo preparato dal D.L. incaricato Ing. G.Avagliano che ammonta ad €uro 2.692,96 oltre 10% di I.V.A. di seguito riportato : 

Art. 	 DESCRIZIONE DEI LAVORI 	 u.m. 	 Quantità  	IMPORTI	
				unitario	TOTALE	
001	Realizzazione scavo a s.o., casseratura, getto cls armato con rete elettrosaldata e successivo disarmo, per posizionamento della pompa di calore esternamente pensilina principale.	ac	1,0	210,00	210,00	
002	Passaggio linee elettriche e collegamenti per  illuminazione esterna faretti aiuola prospetto sud pensilina Piazza Unità d’Italia, comprese opere di assistenza muraria; scavo a mano, posa passacavi. Realizzazione n. 6 basamenti per faretti in cls. Successivo rinterro della traccia e sbassa mento dell’aiuola. Esclusa la fornitura dei faretti.	ac	1,00	490,00	490,00	
003	Lavorazione teak per il rivestimento n. 3 colonnini di ricarica. Inclusa fornitura teak e materiali di assemblaggio.	ac	1,00	780,00	780,00	
004	Assistenza muraria alla posa dell'impianto di condizionamento mediante realizzazione di tracce in corrispondenza della parete del locale tecnico e chiusura delle stesse; realizzazione canalette, alloggio scarico condensa.	ac	1,00	290,00	290,00	
005	Collegamento linea impianto di sorveglianza ed impianto di alimentazione elettrica in corrispondenza della postazione di ricarica presso la Scuola Media “Enrico Pea”: passaggio linee, passacavi esterni e  canalette interne all’edificio, differenziale magnetotermico, collegamento all’impianto esistente.
Inclusa e compensata ogni opera di assistenza muraria all’esterno dell’edificio quale smontaggio pavimentazione autobloccante, scavi, rinterri e ripristino pavimentazione.  Impianto interno totalmente a vista, entro canaletta. Incluse forature per passaggio interno/esterno e succ. ripristino.	ac	1,00	1.080,00	1.080,00	

Importo dei lavori a misura e a corpo	€ 2.850,00	
A detrarre ribasso d'asta del 5,51%	€ 157,04	
Importo NETTO dei lavori a misura	€ 2.692,96	
IVA 10%	€    269,30	
Importo totale IVA inclusa	€ 2.962,26	

Vista l’urgenza e necessità di eseguire i lavori proposti dalla D.L.;

Ritenuto opportuno far eseguire i lavori sopra elencati alla ditta esecutrice della ristrutturazione globale già presente sul cantiere, ditta Lorenzini Pietro srl che ha eseguito i lavori originari in modo pregevole;

Visto che la ditta Lorenzini Pietro srl si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i lavori indicati dalla D.L. a prezzi e condizioni previsti dal computo metrico estimativo allegato e precisamente per un prezzo complessivo di €uro 2.692,96 oltre IVA 10% per un totale complessivo di €uro 2.962,26 applicando così una detrazione del 5,51%;

Rilevata la piena congruità dei prezzi applicati ed il vantaggio tecnico economico degli stessi ;

Visto che la copertura finanziata è assicurata sul cap. sul capitolo10400/0 “Interventi di miglioramento ambientali ” R.P. 2013;
Visto il vigente Statuto Comunale;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

vista la nomina sindacale n.5 del 31/12/2013;

visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14/06/1997;

visto L’art. 3 del  D.L. 174/2012;

Determina

1.	Approvare la perizia estimativa allegata al presente atto riguardante alcuni lavori complementari presso le strutture di ricarica dei veicoli elettrici redatta dal D.L. incaricato Ing. G. Avagliano per un importo complessivo di €uro 2.692,96 oltre IVA come per legge (10%);

2.	Incaricare la ditta Lorenzini Pietro srl dell’esecuzione dei s.d. lavori a patti, prezzi e condizioni indicati nella perizia di cui al punto precedente e precisamente per la somma di €uro 2.692,96 oltre IVA come per legge (10%);

3.	Imputare la spesa derivante dal presente atto di €uro 2.962,26 sul capitolo10400/0 “Interventi di miglioramento ambientali ” R.P. 2013;

4.	Dare atto che il numero del CIG attribuito al presente affidamento è il seguente
	Z4A1245F5C ; 

5.	Disporre che il pagamento avvenga in unica soluzione, a seguito dell’ultimazione e dietro emissione di regolare fattura, come previsto dal regolamento comunale di contabilità, debitamente vistata dal responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale.;

6.	Di stabilire che : ai sensi e per effetti del vigente regolamento comunale dei contratti, il presente atto ha valore, oltre che dispositivo, anche contrattuale, mediante la sottoscrizione, per accettazione, da parte dell’Impresa contraente, di una copia dello stesso e che restano a carico di quest’ultimo le spese contrattuali come previsto per legge e regolamenti vigenti;
 
Porcari 15/12/2014									
				
Il Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale
(Architetto Aldo Gherardi)

**********************************
Visto per la regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267, di €uro 2.962,26 sul capitolo10400/0 “Interventi di miglioramento ambientali ” R.P. 2013;
Imp. n. _________________

Porcari  _________________
							Il Responsabile Servizi Finanziari
                                                                                         (Rag. Giuliana Lera)